Důvodová zpráva
S ohledem na nevyčerpání finančních prostředků poskytnutých SFDI v letošním roce, navrhuje předkladatel schválit smlouvu mezi Libereckým krajem a SDFI o poskytnutí finančních prostředků na rok 2007. Tímto krokem bude zajištěna převoditelnost těchto peněz do roku 2008.

V návaznosti na ustanovení dle bodu 2. - kvalitativní parametry (bod f)) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Studie proveditelnosti a účelnosti pro trasu silnice R35 požadoval zadavatel, aby dokumentace, která bude zpracována v rámci veřejné zakázky „Podkladová dokumentace pro územně analytické podklady Libereckého kraje“ pro odbor územního plánování a stavebního řádu, byla použita jako neopomenutelný podklad pro „Studii proveditelnosti a účelnosti“. Současně zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci doložení časového harmonogramu postupu prací v členění dle jednotlivých částí s uvedením doby plnění díla. 
Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky „Studie proveditelnosti a účelnosti pro trasu silnice R35“ byla odeslána pěti zájemcům dne 15.08.2007, lhůta pro doručení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Podkladová dokumentace pro územně analytické podklady Libereckého kraje“ byla stanovena zadavatelem do 27.08.2007 do 9:00 hod. 
Jelikož ve lhůtě pro podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu nebyla zadavateli doručena žádná nabídka, nemohl zadavatel poskytnout „Podkladovou dokumentaci pro územně analytické podklady Libereckého kraje“ vybranému uchazeči v rámci veřejné zakázky „Studie proveditelnosti a účelnosti pro trasu silnice R35“. Současně vznikla situace, že uchazeči v návaznosti na výše uvedené skutečnosti předložili dle požadavku zadavatele časový harmonogram postupu prací jednotlivých částí s tím, že ve svých nabídkách předpokládali předání „Podkladové dokumentace“ nutné pro včasné a řádné dokončení „Studie proveditelnosti a účelnosti pro trasu silnice R35“. 
Hodnotící komise konstatovala, že na základě výše uvedených skutečností nešlo předložené nabídky objektivně vyhodnotit, neboť jedním z hodnotících kritérií s váhou 40% je „Lhůta pro dokončení části f) veřejné zakázky“. V případě výběru nejvhodnější nabídky a následné úpravy termínu ve smlouvě o dílo by zadavatel porušil zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, neboť by byly upraveny údaje, které byly předmětem hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií. 

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti hodnotící komise konstatovala, že odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil. 

Hodnotící komise doporučila zadavateli v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, veřejnou zakázku „Studie proveditelnosti a účelnosti pro trasu silnice R35“ zrušit. Což zadavatel učinil. Nyní pominuly výše uvedené okolnosti a je možno vypsat zakázku opakovaně.

Předmět veřejné zakázky :

Studie proveditelnosti a účelnosti - přípravné práce a vyhodnocení jednotlivých variant vedení tras rychlostní silnice R 35 již prověřovaných v návrhu konceptu ÚP VUC LK, případně návrh a prověření dalších vhodných variant včetně varianty zvané „Superseverní“. 

Na základě Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/2006 ve znění novelizace č. 2, článku V. navrhuje odbor dopravy následující zahájení zadávacího řízení:

Název VZ:  „Studie proveditelnosti a účelnosti pro trasu silnice R35“

Předpokládaná hodnota VZ: 	4.000.000,- Kč bez DPH - veřejná zakázka podlimitní na služby

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení - § 38 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Hodnotící kritéria: základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky

Seznam zájemců, kteří budou vyzvání k podání nabídky :

Název	Sídlo	IČ	
PRAGOPROJEKT, a.s.	K Ryšánce 1668/16, 147 54  Praha 4	45272387	
CITYPLAN spol. s r.o.	Jindřišská 17/889, 110 00  Praha 1	47307218	
SUDOP PRAHA a.s.	Olšanská 1a, 130 80  Praha 3	25793349	
MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.	Národní č.p. 984/15, 110 00  Praha 1	48588733	
Valbek, spol. s r.o.	Vaňurova 505/17, 460 01  Liberec	48266230	
Investorsko inženýrská a.s., 	Gorkého 658/15, 460 01  Liberec 1	25047183	

Finanční prostředky k realizaci zakázky : hrazeno ze SFDI ve výši 7,5 mil. Kč,  z působnosti odboru dopravy ve výši 2,5 mil Kč.

Přílohy :

105_P01_Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace veřejné zakázky „Studie proveditelnosti a účelnosti pro trasu silnice R 35“
105_P02_Smlouva o  poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007